개발팀 주간업무계획(10. 24 ~ 10. 28)

프로젝트명		개발구분	담당자	진행상황 (현재단계)	금주 진행(10. 17 ~ 10. 21)	내주 진행(10. 24 ~ 10. 28)	비고(문제사항)
과정개발	경기도 여성능력 개발센터	외주	￭ PM - 정란 연구원 ￭ 외주업체 - 엘릭스, 오레츠 애니스토리	프로토타입 개발	￭ SME 원고 및 동영상 스케줄 확정, ￭ Prototype UI 및 디자인 시안 확인 ￭ Prototype 스토리보드(9과목 중 3개 과목) ￭ 설계안에 대한 SME 교육 (개별 미팅, e-mail 등) ￭ SME 동영상 촬영(9과목 중 1개 과목)	￭ Prototype UI 및 디자인 확정 ￭ Prototype 스토리보드 완료 ￭ Prototype 개발 1차 완료 ￭ SME 동영상 촬영 완료 ￭ 이후 원고 스케줄 확정	￭ 11. 3 사이버 여성센터 개소식에 맞춰 9개 과정 프로토타입 시연 예정
	Leadership At the edge	자체	￭ 설계 - 김은영 연구원 ￭ 개발 - 박꽃별 연구원 - 외주 디자이너 1인 (성민영) ￭ 객원 - 김기범 선임연구원	설계/개발	￭ 설계 : 1~3모듈 학습자 매뉴얼 설계 ￭ 개발 : 온라인 사전학습 수정보완 1~2모듈 학습자매뉴얼 작업, ppt 디자인 수정보완 모듈별 디자인 작업 리더십 교재 파일홀더/교재 인쇄 작업 완료 수료증 작업, 도서가판대 디자인 기획	￭ 설계 : 1~4모듈 학습자메뉴얼, 강의자료 ￭ 개발 : 1~4모듈 학습자메뉴얼, 강의자료 제작 , 사이트 프로그래밍 검수, 온라인 사전학 습 수정보완, ppt 디자인 수정보완 모듈별 디자인 작업완료 리더십 교재 파일홀더 / 교재 인쇄작업 완료, 수료증 작업 완료, 도서가판대 디자인 기획, 노트 표지작업 ￭ 완료예정시점 : 11. 4
	현대맨의 New Way!! New Value	자체(외주)	￭ 설계 PM - 서상훈 ￭ 설계외주인력 - 노동원 ￭ 디자인 PM - 정연경 ￭ 디자인 외주인력 - 옥주복 - 목진우 - 서민철	설계/개발	￭ 개발기획 : 개발품의 완료 전문가 초청강의 기획 외주 인력 추가 투입(목진우씨) ￭ 설계 : 4개 모듈 자료수집/스토리보드 완료 (전체 8개 모듈 중) ￭ 개발 : UI / 캐릭터 제작 완료, 자이닉스 템플릿, 팝업창 디자인 등 완료	￭ 개발기획 : 외주인력 추가 투입(서민철씨) ￭ 설계 : 전체 모듈 설계 완료 진단 및 설문 기획 그룹 임직원 인터뷰 계획안 작성 및 인터뷰 대상자 섭외 전문가 섭외 ￭ 개발 : 3개 모듈 개발 완료, 음성 녹음 예정 ￭ 완료예정시점 : 11. 30(11. 15 지정 신고)	￭ 진단 및 설문시스템 구현관련 운영팀 협의 필요 ￭ 그룹 구성원 인터뷰 섭외 요청(그룹 전략경영실)
기타