개발팀 주간업무계획(12. 5 ~ 12. 9)

프로젝트명

개발구분

담당자

진행상황

(현재단계)

금주 진행(11. 28 ~ 12. 2)

내주 진행(12. 5 ~ 12. 9)

비고

(문제사항)

과정개발

경기도

여성능력 개발센터

외주

￭ PM

- 정란 연구원

￭ 외주업체

- 엘릭스, 오레츠

애니스토리

설계/개발

▸ 12월 오픈 3개 과목 개발완료 예정(12월 3일 오전까지 패키징하여

넘기기로 함)

▸ 11월 28일(월) 정기 회의 진행

▸ 11월 29일(화) SCO관련 회의

(SCO 단위를 차시에서 학습flow단계로 수정/top디자인 작업요청 받음)

▸ 11월 30일(수) 과정시연회 실시

▸ 12월 01일(목) SCO 결정관련 확인 미팅

▸ 시연회 피드백에 대한 후속 설계 방향 및 수정보완 사항 정리

▸ 12월 02일 진행 상황

과목명	원고	설계	개발
			동영상	컨텐츠
HTML과 Java Script를 이용한 홈페이지 제작	20/20	20/20	20/20	20/20
Dreamweaver를 이용한 홈페이지 제작	20/20	3/20	7/20	1/20
Illustrator	40/40	20/40	20/40	20/40
FlashMX	20/40	2/40	`1/40	1/40
포토샵을 이용한 디지털 사진 편집	20/20	20/20	20/20	20/20
Flash Actionscript 활용	20/20	2/20	1/20	1/20
초보자를 위한 Java 프로그래밍	20/20	5/20	20/20	1/20
초보자를 위한 JDBC Programming	20/20	1/20	1/20	1/20
Oracle 9i SQL & PL/SQL 입문	20/20	5/20	20/20	1/20

▸ 12월 5일 오픈과목 Usability test 실시 및 수정보완

▸ 1월 오픈 6개 과정에 대한 설계 전략 개선방안 확정

▸ prototype 설계

▸ 12월 09일 진행 예정 상황

과목명	원고	설계	개발
			동영상	컨텐츠
HTML과 Java Script를 이용한 홈페이지 제작	20/20	20/20	20/20	20/20
Dreamweaver를 이용한 홈페이지 제작	20/20	3/20	7/20	1/20
Illustrator	40/40	20/40	20/40	20/40
FlashMX	40/40	2/40	20/40	1/40
포토샵을 이용한 디지털 사진 편집	20/20	20/20	20/20	20/20
Flash Actionscript 활용	20/20	2/20	10/20	1/20
초보자를 위한 Java 프로그래밍	20/20	5/20	20/20	1/20
초보자를 위한 JDBC Programming	20/20	1/20	1/20	1/20
Oracle 9i SQL & PL/SQL 입문	20/20	5/20	20/20	1/20

표준협회 e-Test

외주

계약 전

￭ 과정개발 협의(표준협회, 12. 2)

￭ 전체 개발계약 내용 재협의

￭ 외주업체(라오니스) 개발 제안 PT(12. 7)

￭ 최종 제안 전달(12. 9, 표준협회)

현대맨의

New Way!!

New Value

자체(외주)

￭ 설계 PM

- 서상훈

￭ 설계외주인력

- 노동원

￭ 디자인 PM

- 정연경

￭ 디자인 외주인력

- 옥주복, 목진우, 서민철

수정/보완

￭ 전문가 동영상 강의 촬영 / 편집

￭ 과정 수정/보완, 교육 실시

￭ 그룹 회장 보고용 자료 작성

￭ 교육 안내 메일 및 전문가 동영상 강의 안내 메일 제작

￭ 과정 모니터링 및 수정 / 보완

￭ 전문가 동영상 강의 안내 메일 제작

기타

TPS 판매

자체

￭ PM : 박꽃별

￭ 제작 : 외주 인력 1

인

계획 진행

￭ 표준협회 미팅

￭ 홍보 자료 전달(12. 5)

￭ 전체 보완 계획 작성 및 제작 착수

￭ 과정 성우 확보(엘리스)